LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
[Título] 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
TEXTO VIGENTE 
LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 4 DE ENERO DE 2000. 
(ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE MARZO DE 2000) 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES SABED: 
QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
[Artículo 1] 
ARTICULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PUBLICO Y TIENE POR OBJETO REGULAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTRATACION, GASTO, EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS, ASI COMO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN: 
I. LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; 
II. LAS SECRETARIAS DE ESTADO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL; 
III. LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; 
IV. LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; 
V. LAS EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL FIDEICOMITENTE . SEA EL GOBIERNO FEDERAL O UNA ENTIDAD PARAESTATAL, Y 
VI. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, CONFORME A LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL EJECUTIVO FEDERAL, CON LA PARTICIPACION QUE, EN SU CASO, CORRESPONDA A LOS MUNICIPIOS INTERESADOS. NO QUEDAN COMPRENDIDOS LOS FONDOS PREVISTOS EN EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 
LAS PERSONAS DE DERECHO PUBLICO DE CARACTER FEDERAL CON AUTONOMIA DERIVADA DE LA CONSTITUCION, APLICARAN LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, EN LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE LOS RIGEN, SUJETANDOSE A SUS PROPIOS ORGANOS DE CONTROL. 
LOS CONTRATOS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS CON LAS ENTIDADES, O ENTRE ENTIDADES Y LOS ACTOS JURIDICOS QUE SE CELEBREN ENTRE DEPENDENCIAS, O BIEN, LOS QUE SE LLEVEN A CABO ENTRE ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CON ALGUNA PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, NO ESTARAN DENTRO DEL AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY. CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD OBLIGADA A REALIZAR LOS TRABAJOS NO TENGA LA CAPACIDAD PARA HACERLO POR SI MISMA Y CONTRATE A UN TERCERO PARA LLEVARLOS A CABO, ESTE ACTO QUEDARA SUJETO A ESTE ORDENAMIENTO. 
NO ESTARAN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, LAS OBRAS QUE DEBAN EJECUTARSE PARA CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE LOS PARTICULARES TENGAN CONCESIONADOS, EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, CUANDO ESTOS LAS LLEVEN A CABO. 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO SE REALIZARAN CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y 30 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL, Y ESTARAN REGIDOS POR ESTA LEY UNICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA. 
LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES EMITIRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DE CONFORMIDAD CON ESTE MISMO ORDENAMIENTO, LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LAS MATERIAS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE ABSTENDRAN DE CREAR FIDEICOMISOS, OTORGAR MANDATOS O CELEBRAR ACTOS O CUALQUIER TIPO DE CONTRATOS, QUE EVADAN LO PREVISTO EN ESTE ORDENAMIENTO. 
[Artículo 2] 
ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERA POR: 
I. SECRETARIA: LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; 
II. CONTRALORIA: LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 
III. DEPENDENCIAS: LAS SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTICULO 1; 
IV. ENTIDADES: LAS MENCIONADAS EN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTICULO 1; 
V. TRATADOS: LOS CONVENIOS REGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, CELEBRADOS POR ESCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y UNO O VARIOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, YA SEA QUE PARA SU APLICACION REQUIERA O NO LA CELEBRACION DE ACUERDOS EN MATERIAS ESPECIFICAS, CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, MEDIANTE LOS CUALES LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASUMEN COMPROMISOS; 
VI. CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y VII. LICITANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, O BIEN DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
[Artículo 3] 
ARTICULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN OBRAS PUBLICAS LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES. ASIMISMO, QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS OBRAS PUBLICAS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
I. EL MANTENIMIENTO Y LA RESTAURACION DE BIENES MUEBLES INCORPORADOS O ADHERIDOS A UN INMUEBLE, CUANDO IMPLIQUE MODIFICACION AL PROPIO INMUEBLE; 
II. LOS TRABAJOS DE EXPLORACION, GEOTECNIA, LOCALIZACION Y PERFORACION QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PETROLEROS Y GAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUBSUELO Y LA PLATAFORMA MARINA; 
III. LOS PROYECTOS INTEGRALES O LLAVE EN MANO, EN LOS CUALES EL CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE EL DISEÑO DE LA OBRA HASTA SU TERMINACION TOTAL, INCLUYENDOSE, CUANDO SE REQUIERA, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; 
IV. LOS TRABAJOS DE EXPLORACION, LOCALIZACION Y PERFORACION DISTINTOS A LOS DE EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS; MEJORAMIENTO DEL SUELO Y SUBSUELO; DESMONTES; EXTRACCION Y AQUELLOS SIMILARES, QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE ENCUENTREN EN EL SUELO O EN EL SUBSUELO; 
V. INSTALACION DE ISLAS ARTIFICIALES Y PLATAFORMAS UTILIZADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES; 
VI. LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA; 
VII. LA INSTALACION, MONTAJE, COLOCACION O APLICACION, INCLUYENDO LAS PRUEBAS DE OPERACION DE BIENES MUEBLES QUE DEBAN INCORPORARSE, ADHERIRSE O DESTINARSE A UN INMUEBLE, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS . BIENES SEAN PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE AL CONTRATISTA; O BIEN, CUANDO INCLUYAN LA ADQUISICION Y SU PRECIO SEA MENOR AL DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATEN, Y 
VIII. TODOS AQUELLOS DE NATURALEZA ANALOGA. 
[Artículo 4] 
ARTICULO 4.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN COMO SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONCEBIR, DISEÑAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE OBRA PUBLICA; LAS INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS QUE SE VINCULEN CON LAS ACCIONES QUE REGULA ESTA LEY; LA DIRECCION O SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LOS ESTUDIOS QUE TENGAN POR OBJETO REHABILITAR, CORREGIR O INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES. ASIMISMO, QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
I. LA PLANEACION Y EL DISEÑO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONCEBIR, DISEÑAR, PROYECTAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE INGENIERIA BASICA, ESTRUCTURAL, DE INSTALACIONES, DE INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIAL, ELECTROMECANICA Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD DE LA INGENIERIA QUE SE REQUIERA PARA INTEGRAR UN PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA PUBLICA; 
II. LA PLANEACION Y EL DISEÑO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONCEBIR, DISEÑAR, PROYECTAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO URBANO, ARQUITECTONICO, DE DISEÑO GRAFICO O ARTISTICO Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD DEL DISEÑO, LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO, QUE SE REQUIERA PARA INTEGRAR UN PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA PUBLICA; 
III. LOS ESTUDIOS TECNICOS DE AGROLOGIA Y DESARROLLO PECUARIO, HIDROLOGIA, MECANICA DE SUELOS, SISMOLOGIA, TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, GEODESIA, GEOTECNIA, GEOFISICA, GEOTERMIA, OCEANOGRAFIA, METEOROLOGIA, AEROFOTOGRAMETRIA, AMBIENTALES, ECOLOGICOS Y DE INGENIERIA DE TRANSITO; 
IV. LOS ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE PLANEACION DE PREINVERSION, FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA, ECOLOGICA O SOCIAL, DE EVALUACION, ADAPTACION, TENENCIA DE LA TIERRA, FINANCIEROS, DE DESARROLLO Y RESTITUCION DE LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES; 
V. LOS TRABAJOS DE COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA; DE LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD; DE LABORATORIO DE GEOTECNIA, DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y RADIOGRAFIAS INDUSTRIALES; DE PREPARACION DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTACION O LA ELABORACION DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO O TRABAJO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE; VI. LOS TRABAJOS DE ORGANIZACION, INFORMATICA, COMUNICACIONES, CIBERNETICA Y SISTEMAS APLICADOS A LAS MATERIAS QUE REGULA ESTA LEY; 
VII. LOS DICTAMENES, PERITAJES, AVALUOS Y AUDITORIAS TECNICO NORMATIVAS, Y ESTUDIOS APLICABLES A LAS MATERIAS QUE REGULA ESTA LEY; 
VIII. LOS ESTUDIOS QUE TENGAN POR OBJETO REHABILITAR, CORREGIR, SUSTITUIR O INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES EN UN BIEN INMUEBLE; 
IX. LOS ESTUDIOS DE APOYO TECNOLOGICO, INCLUYENDO LOS DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ENTRE OTROS, Y 
X. TODOS AQUELLOS DE NATURALEZA ANALOGA. 
[Artículo 5] 
ARTICULO 5.- LA APLICACION DE ESTA LEY SERA SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS. 
[Artículo 6] 
ARTICULO 6.- SERA RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MANTENER ADECUADA Y SATISFACTORIAMENTE ASEGURADAS LAS OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL MOMENTO DE SU RECEPCION.  
[Artículo 7] 
ARTICULO 7.- EL GASTO PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE SUJETARA, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, ASI COMO A LO PREVISTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
[Artículo 8] 
ARTICULO 8.- LA SECRETARIA, LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y LA CONTRALORIA, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTARAN FACULTADAS PARA INTERPRETAR ESTA LEY PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS. 
LA CONTRALORIA DICTARA LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, TOMANDO EN CUENTA LA OPINION DE LA SECRETARIA Y, CUANDO CORRESPONDA, LA DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. TALES DISPOSICIONES SE PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 
[Artículo 9] 
ARTICULO 9.- ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y A LAS DEMAS QUE DE ELLA EMANEN, LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DICTARA LAS REGLAS QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DERIVADAS DE PROGRAMAS QUE TENGAN POR OBJETO PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS NACIONALES, ESPECIALMENTE DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS. 
PARA LA EXPEDICION DE LAS REGLAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TOMARA EN CUENTA LA OPINION DE LA SECRETARIA Y DE LA CONTRALORIA. 
[Artículo 10] 
ARTICULO 10.- EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES SERAN LOS RESPONSABLES DE QUE, EN LA ADOPCION E INSTRUMENTACION DE LAS ACCIONES QUE DEBAN LLEVAR A CABO EN CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, SE OBSERVEN CRITERIOS QUE PROMUEVAN LA MODERNIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, LA DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES Y LA EFECTIVA DELEGACION DE FACULTADES. 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTA LEY A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS PODRAN SER EJERCIDAS POR LOS TITULARES DE SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS, PREVIO ACUERDO DELEGATORIO. 
[Artículo 11] 
ARTICULO 11.- CORRESPONDE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE EN NINGUN CASO SE PODRAN CONTRATAR SERVICIOS PARA QUE POR SU CUENTA Y ORDEN SE CONTRATEN LAS OBRAS O SERVICIOS DE QUE SE TRATE. 
[Artículo 12] 
ARTICULO 12.- EN LOS CASOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FINANCIADOS CON CREDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL, O CON SU AVAL, LOS PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES PARA SU CONTRATACION SERAN ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA APLICANDO EN LO PROCEDENTE LO DISPUESTO POR ESTA LEY Y DEBERAN PRECISARSE EN LAS CONVOCATORIAS, INVITACIONES, BASES Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES. 
[Artículo 13] 
ARTICULO 13.- EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.  
[Artículo 14] 
ARTICULO 14.- CUANDO POR LAS CONDICIONES ESPECIALES DE LAS OBRAS PUBLICAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE REQUIERA LA INTERVENCION DE DOS O MAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CADA UNA DE ELLAS SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE LE CORRESPONDA, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD QUE, EN RAZON DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, TENGA LA ENCARGADA DE LA PLANEACION Y PROGRAMACION DEL CONJUNTO. 
EN LOS CONVENIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 1 DE ESTA LEY, SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS PARA LA COORDINACION DE LAS ACCIONES ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CORRESPONDAN Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 
[Artículo 15] 
ARTICULO 15.- LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O APLICACION DE ESTA LEY O DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON BASE EN ELLA, SERAN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES. 
SOLO PODRA CONVENIRSE COMPROMISO ARBITRAL RESPECTO DE AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE DETERMINE LA CONTRALORIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL, PREVIA OPINION DE LA SECRETARIA Y DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, YA SEA EN CLAUSULA COMPROMISORIA INCLUIDA EN EL CONTRATO O EN CONVENIO INDEPENDIENTE. 
LO PREVISTO EN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES ES SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LOS TRATADOS DE QUE MEXICO SEA PARTE, O DE QUE EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO LA CONTRALORIA CONOZCA DE LAS INCONFORMIDADES QUE PRESENTEN LOS PARTICULARES EN RELACION CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, O BIEN, DE LAS QUEJAS QUE EN AUDIENCIA DE CONCILIACION CONOZCA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN LOS CONTRATOS. 
LO DISPUESTO POR ESTE ARTICULO SE APLICARA A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SOLO CUANDO SUS LEYES NO REGULEN DE MANERA EXPRESA LA FORMA EN QUE PODRAN RESOLVER CONTROVERSIAS. 
LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALICEN O CELEBREN EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO POR ESTA LEY, SERAN NULOS PREVIA DETERMINACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 
[Artículo 16] 
ARTICULO 16.- LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO RESPECTO DE OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE DEBAN SER EJECUTADOS O PRESTADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, SE REGIRAN POR LA LEGISLACION DEL LUGAR DONDE SE FORMALICE EL ACTO, APLICANDO EN LO PROCEDENTE LO DISPUESTO POR ESTA LEY. 
CUANDO LAS OBRAS Y SERVICIOS HUBIEREN DE SER EJECUTADOS O PRESTADOS EN EL PAIS, TRATANDOSE EXCLUSIVAMENTE DE LICITACIONES PUBLICAS, SU PROCEDIMIENTO Y LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE ELLAS DEBERAN REALIZARSE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 
TITULO SEGUNDO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
CAPITULO UNICO 
[Artículo 17] 
ARTICULO 17.- EN LA PLANEACION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN AJUSTARSE A: 
I. LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 
II. LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES Y ESPECIALES QUE CORRESPONDAN, ASI COMO A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN SUS PROGRAMAS ANUALES, Y 
III. LOS OBJETIVOS, METAS Y PREVISIONES DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACION O DE LAS ENTIDADES RESPECTIVAS. 
[Artículo 18] 
ARTICULO 18.- LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE REQUIERAN CONTRATAR O REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS, PREVIAMENTE VERIFICARAN SI EN SUS ARCHIVOS O, EN SU CASO, EN LOS DE LA COORDINADORA DEL SECTOR CORRESPONDIENTE, EXISTEN ESTUDIOS O PROYECTOS SOBRE LA MATERIA DE QUE SE TRATE. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADVIERTA SU EXISTENCIA Y SE COMPRUEBE QUE LOS MISMOS SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA, NO PROCEDERA LA CONTRATACION, CON EXCEPCION DE AQUELLOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU ADECUACION, ACTUALIZACION O COMPLEMENTO. 
A FIN DE COMPLEMENTAR LO ANTERIOR, LAS ENTIDADES DEBERAN REMITIR A SU COORDINADORA DE SECTOR UNA DESCRIPCION SUCINTA DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS QUE EN ESTAS MATERIAS CELEBREN, ASI COMO DE SUS PRODUCTOS. 
LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS SOLO SE PODRAN CELEBRAR CUANDO LAS AREAS RESPONSABLES DE SU EJECUCION NO DISPONGAN CUANTITATIVA O CUALITATIVAMENTE DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES Y PERSONAL PARA LLEVARLOS A CABO, LO CUAL DEBERA JUSTIFICARSE A TRAVES DEL DICTAMEN QUE PARA TAL EFECTO EMITA EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS. 
[Artículo 19] 
ARTICULO 19.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE REALICEN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA, ASI COMO LOS CONTRATISTAS CON QUIENES AQUELLAS CONTRATEN, OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LAS OBRAS PUBLICAS. 
EN LAS BASES DE LICITACION SE PRECISARAN, EN SU CASO, AQUELLOS TRAMITES QUE CORRESPONDERA REALIZAR AL CONTRATISTA. 
[Artículo 20] 
ARTICULO 20.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTARAN OBLIGADAS A CONSIDERAR LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDA CAUSAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS CON SUSTENTO EN LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTA POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. LOS PROYECTOS DEBERAN INCLUIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA QUE SE PRESERVEN O RESTITUYAN EN FORMA EQUIVALENTE LAS CONDICIONES AMBIENTALES CUANDO ESTAS PUDIEREN DETERIORARSE Y SE DARA LA INTERVENCION QUE CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE . MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, Y A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE TENGAN ATRIBUCIONES EN LA MATERIA.  
[Artículo 21] 
ARTICULO 21.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS FORMULARAN SUS PROGRAMAS ANUALES DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS QUE ABARQUEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASI COMO SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS, CONSIDERANDO: 
I. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE SE REQUIERAN PARA DEFINIR LA FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA Y SOCIAL DE LOS TRABAJOS; 
II. LOS OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; 
III. LAS ACCIONES PREVIAS, DURANTE Y POSTERIORES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, INCLUYENDO, CUANDO CORRESPONDA, LAS OBRAS PRINCIPALES, LAS DE INFRAESTRUCTURA, LAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS, ASI COMO LAS ACCIONES PARA PONER AQUELLAS EN SERVICIO; 
IV. LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES, CLIMATICAS Y GEOGRAFICAS DE LA REGION DONDE DEBA REALIZARSE LA OBRA PUBLICA; 
V. LAS NORMAS APLICABLES CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION O, A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES; 
VI. LOS RESULTADOS PREVISIBLES; 
VII. LA COORDINACION QUE SEA NECESARIA PARA RESOLVER POSIBLES INTERFERENCIAS Y EVITAR DUPLICIDAD DE TRABAJOS O INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS; 
VIII. LA CALENDARIZACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS GASTOS DE OPERACION; 
IX. LAS UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCION, ASI COMO LAS FECHAS PREVISTAS DE INICIACION Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS; 
X. LAS INVESTIGACIONES, ASESORIAS, CONSULTORIAS Y ESTUDIOS QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA NECESARIOS; 
XI. LA ADQUISICION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION NECESARIOS; 
XII. LA EJECUCION, QUE DEBERA INCLUIR EL COSTO ESTIMADO DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE SE REALICEN POR CONTRATO Y, EN CASO DE REALIZARSE POR ADMINISTRACION DIRECTA, LOS COSTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS; LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, DE MAQUINARIA, DE EQUIPOS O DE CUALQUIER OTRO ACCESORIO RELACIONADO CON LOS TRABAJOS; LOS CARGOS PARA PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LOS INDIRECTOS DE LOS TRABAJOS; 
XIII. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES A SU CARGO; 
XIV. LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN; 
XV. TODA INSTALACION PUBLICA DEBERA ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD, EVACUACION, LIBRE TRANSITO SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS; Y DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACION QUE SE EMITAN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMAS INSTALACIONES ANALOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y 
XVI. LAS DEMAS PREVISIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS. 
[Artículo 22] 
ARTICULO 22.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PONDRAN A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS Y REMITIRAN A LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO, SU PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON EXCEPCION DE AQUELLA INFORMACION QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, SEA DE NATURALEZA CONFIDENCIAL. 
EL CITADO PROGRAMA SERA DE CARACTER INFORMATIVO, NO IMPLICARA COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACION Y PODRA SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. 
PARA EFECTOS INFORMATIVOS, LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL INTEGRARA Y DIFUNDIRA LOS PROGRAMAS ANUALES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL PODRA REQUERIR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES A DICHOS PROGRAMAS. 
[Artículo 23] 
ARTICULO 23.- EN LAS OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUYA EJECUCION REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DEBERAN DETERMINAR TANTO EL PRESUPUESTO TOTAL, COMO EL RELATIVO A LOS EJERCICIOS DE QUE SE TRATE; EN LA FORMULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, ADEMAS DE CONSIDERAR LOS COSTOS QUE, EN SU MOMENTO, SE ENCUENTREN VIGENTES, SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE ASEGUREN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS. 
EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO SERA LA BASE PARA SOLICITAR LA ASIGNACION DE CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL SUBSECUENTE. 
LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA PARA CADA CONTRATO SERVIRA DE BASE PARA OTORGAR, EN SU CASO, EL PORCENTAJE PACTADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO. 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OBSERVARAN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 . DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL. 
[Artículo 24] 
ARTICULO 24.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN CONVOCAR, ADJUDICAR O CONTRATAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SOLAMENTE CUANDO CUENTEN CON LA AUTORIZACION GLOBAL O ESPECIFICA, POR PARTE DE LA SECRETARIA, DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y DE GASTO CORRIENTE, CONFORME A LOS CUALES DEBERAN ELABORARSE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION Y PAGOS CORRESPONDIENTES. 
EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA APROBACION DE LA SECRETARIA, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN CONVOCAR SIN CONTAR CON DICHA AUTORIZACION. 
PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS SE REQUERIRA CONTAR CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, NORMAS DE CALIDAD Y EL PROGRAMA DE EJECUCION TOTALMENTE TERMINADOS, O BIEN, CON UN AVANCE EN SU DESARROLLO QUE PERMITA A LOS LICITANTES PREPARAR UNA PROPUESTA SOLVENTE Y EJECUTAR ININTERRUMPIDAMENTE LOS TRABAJOS HASTA SU CONCLUSION. 
[Artículo 25] 
ARTICULO 25.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES, ATENDIENDO A LA CANTIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN, PODRAN ESTABLECER COMITES DE OBRAS PUBLICAS, LOS CUALES TENDRAN COMO MINIMO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
I. REVISAR LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO FORMULAR LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CONVENIENTES; 
II. PROPONER LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO AUTORIZAR LOS SUPUESTOS NO PREVISTOS EN ESTOS, SOMETIENDOLAS A CONSIDERACION DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O AL ORGANO DE GOBIERNO EN EL CASO DE LAS ENTIDADES; 
III. DICTAMINAR, PREVIAMENTE A LA INICIACION DEL PROCEDIMIENTO, SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR LICITACIONES PUBLICAS POR ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 42 DE ESTA LEY; 
IV. AUTORIZAR, CUANDO SE JUSTIFIQUE, LA CREACION DE SUBCOMITES DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO APROBAR LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS; 
V. ELABORAR Y APROBAR EL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE, CONFORME A LAS BASES QUE EXPIDA LA CONTRALORIA, Y 
VI. COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
[Artículo 26] 
ARTICULO 26.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR ALGUNA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: 
I. POR CONTRATO, O 
II. POR ADMINISTRACION DIRECTA. 
TITULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
CAPITULO PRIMERO GENERALIDADES 
[Artículo 27] 
ARTICULO 27.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRAN CONTRATAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN: 
I. LICITACION PUBLICA; 
II. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, O 
III. ADJUDICACION DIRECTA. 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DEBERAN ESTABLECERSE LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, ESPECIALMENTE POR LO QUE SE REFIERE A TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA, PLAZOS DE EJECUCION, NORMALIZACION APLICABLE EN TERMINOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, FORMA Y TIEMPO DE PAGO, PENAS CONVENCIONALES, ANTICIPOS Y GARANTIAS; DEBIENDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROPORCIONAR A TODOS LOS INTERESADOS IGUAL ACCESO A LA INFORMACION RELACIONADA CON DICHOS PROCEDIMIENTOS, A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGUN PARTICIPANTE. 
LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, TOMANDO EN CUENTA LA OPINION DE LA CONTRALORIA, DETERMINARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 DE ESTA LEY EL CARACTER NACIONAL O INTERNACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR, EN RAZON DE LAS RESERVAS, MEDIDAS DE TRANSICION U OTROS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS TRATADOS. 
LA CONTRALORIA PONDRA A DISPOSICION PUBLICA, A TRAVES DE LOS MEDIOS DE DIFUSION ELECTRONICA QUE ESTABLEZCA, LA INFORMACION QUE OBRE EN SU BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE A LAS CONVOCATORIAS Y BASES DE LAS LICITACIONES Y, EN SU CASO, SUS MODIFICACIONES; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y DE VISITA A INSTALACIONES, LOS FALLOS DE DICHAS LICITACIONES O LAS CANCELACIONES DE ESTAS, Y LOS DATOS RELEVANTES DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS, SEAN POR LICITACION, INVITACION O ADJUDICACION DIRECTA.  
[Artículo 28] 
ARTICULO 28.- LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ADJUDICARAN, POR REGLA GENERAL, A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA, PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERA ABIERTO PUBLICAMENTE, A FIN DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY. 
EL SOBRE A QUE HACE REFERENCIA ESTE ARTICULO PODRA ENTREGARSE, A ELECCION DEL LICITANTE, EN EL LUGAR DE CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES; O BIEN, SI ASI LO ESTABLECE LA CONVOCANTE, ENVIARLO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA, O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORIA. 
EN EL CASO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA EL SOBRE SERA GENERADO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS QUE RESGUARDEN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES TECNICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA CONTRALORIA. 
LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS DEBERAN SER FIRMADAS AUTOGRAFAMENTE POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS; EN EL CASO DE QUE ESTAS SEAN ENVIADAS A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, EN SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA, SE EMPLEARAN MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA, LOS CUALES PRODUCIRAN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y, EN CONSECUENCIA, TENDRAN EL MISMO VALOR PROBATORIO. 
LA CONTRALORIA OPERARA Y SE ENCARGARA DEL SISTEMA DE CERTIFICACION DE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA QUE UTILICEN LOS LICITANTES Y SERA RESPONSABLE DE EJERCER EL CONTROL DE ESTOS MEDIOS, SALVAGUARDANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE SE REMITA POR ESTA VIA. 
[Artículo 29] 
ARTICULO 29.- EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OPTARAN, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, POR EL EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PAIS Y POR LA UTILIZACION DE BIENES O SERVICIOS DE PROCEDENCIA NACIONAL Y LOS PROPIOS DE LA REGION, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS. 
TITULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
CAPITULO SEGUNDO DE LA LICITACION PUBLICA 
[Artículo 30] 
ARTICULO 30.- LAS LICITACIONES PUBLICAS PODRAN SER: 
I. NACIONALES, CUANDO UNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA, O 
II. INTERNACIONALES, CUANDO PUEDAN PARTICIPAR TANTO PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA COMO EXTRANJERA. 
SOLAMENTE SE DEBERAN LLEVAR A CABO LICITACIONES INTERNACIONALES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
A) CUANDO RESULTE OBLIGATORIO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TRATADOS; 
B) CUANDO, PREVIA INVESTIGACION QUE REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, LOS CONTRATISTAS NACIONALES NO CUENTEN CON LA CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SEA CONVENIENTE EN TERMINOS DE PRECIO; 
C) CUANDO HABIENDOSE REALIZADO UNA DE CARACTER NACIONAL, NO SE PRESENTEN PROPUESTAS, Y 
D) CUANDO ASI SE ESTIPULE PARA LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON CREDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL. 
PODRA NEGARSE LA PARTICIPACION A EXTRANJEROS EN LICITACIONES INTERNACIONALES, CUANDO CON EL PAIS DEL CUAL SEAN NACIONALES NO SE TENGA CELEBRADO UN TRATADO Y ESE PAIS NO CONCEDA UN TRATO RECIPROCO A LOS LICITANTES, CONTRATISTAS, BIENES O SERVICIOS MEXICANOS. 
EN LAS LICITACIONES PUBLICAS, PODRA REQUERIRSE LA INCORPORACION DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DE FABRICACION NACIONAL, POR EL PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS TRABAJOS QUE DETERMINE LA CONVOCANTE. 
[Artículo 31] 
ARTICULO 31.- LAS CONVOCATORIAS PODRAN REFERIRSE A UNA O MAS OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y CONTENDRAN: 
I. EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE; 
II. LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 
III. LA INDICACION DE LOS LUGARES, FECHAS Y HORARIOS EN QUE LOS INTERESADOS PODRAN OBTENER LAS BASES DE LA LICITACION Y, EN SU CASO, EL COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. CUANDO LAS BASES IMPLIQUEN UN COSTO, ESTE SERA FIJADO SOLO EN RAZON DE LA RECUPERACION DE LAS EROGACIONES POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y DE LA REPRODUCCION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN; LOS INTERESADOS PODRAN REVISARLAS PREVIAMENTE A SU PAGO, EL CUAL SERA REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. IGUALMENTE, LOS INTERESADOS PODRAN CONSULTAR Y ADQUIRIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES POR LOS MEDIOS DE DIFUSION ELECTRONICA QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORIA; IV. LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS; 
V. LA INDICACION DE SI LA LICITACION ES NACIONAL O INTERNACIONAL; Y EN CASO DE SER INTERNACIONAL, SI SE REALIZARA O NO BAJO LA COBERTURA DEL CAPITULO DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO DE ALGUN TRATADO, Y EL IDIOMA O IDIOMAS, ADEMAS DEL ESPAÑOL, EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES; 
VI. LA INDICACION DE QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS; 
VII. LA DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA O DEL SERVICIO Y EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, ASI COMO, EN SU CASO, LA INDICACION DE QUE PODRAN SUBCONTRATARSE PARTES DE LOS MISMOS; 
VIII. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN DIAS NATURALES, INDICANDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS; 
IX. LOS PORCENTAJES DE LOS ANTICIPOS QUE, EN SU CASO, SE OTORGARIAN; 
X. LA INDICACION DE QUE NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE ESTA LEY; 
XI. DETERMINACION, EN SU CASO, DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, Y 
XII. LOS DEMAS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS. 
[Artículo 32] 
ARTICULO 32.- LAS CONVOCATORIAS SE PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 
[Artículo 33] 
ARTICULO 33.- LAS BASES QUE EMITAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LAS LICITACIONES PUBLICAS SE PONDRAN A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS, TANTO EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR LA CONVOCANTE COMO EN LOS MEDIOS DE DIFUSION ELECTRONICA QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORIA, A PARTIR DEL DIA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y HASTA, INCLUSIVE, EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS INTERESADOS ADQUIRIRLAS OPORTUNAMENTE DURANTE ESTE PERIODO, Y CONTENDRAN EN LO APLICABLE COMO MINIMO, LO SIGUIENTE: 
I. NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE; 
II. FORMA EN QUE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA EL LICITANTE; 
III. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACION, SIENDO OPTATIVA LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES QUE, EN SU CASO, SE REALICEN; FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES; COMUNICACION DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO; 
IV. SEÑALAMIENTO DE QUE SERA CAUSA DE DESCALIFICACION EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS LICITANTES; 
V. IDIOMA O IDIOMAS, ADEMAS DEL ESPAÑOL, EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES; 
VI. MONEDA O MONEDAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. EN LOS CASOS EN QUE SE PERMITA HACER LA COTIZACION EN MONEDA EXTRANJERA SE DEBERA ESTABLECER QUE EL PAGO QUE SE REALICE EN EL TERRITORIO NACIONAL SE HARA EN MONEDA NACIONAL Y AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO; 
VII. LA INDICACION DE QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRAN SER NEGOCIADAS; 
VIII. CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 38 DE ESTA LEY; 
IX. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LA PROPOSICION; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION APLICABLES, EN EL CASO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, DEBERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO; 
X. TRATANDOSE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE DEBERAN PRECISAR EL OBJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES; EL PRODUCTO ESPERADO, Y LA FORMA DE PRESENTACION; 
XI. RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA CONVOCANTE, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES; 
XII. EN SU CASO, EL SEÑALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE SERIAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 
XIII. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA NECESARIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 
XIV. DATOS SOBRE LAS GARANTIAS; PORCENTAJES, FORMA Y TERMINOS DE LOS ANTICIPOS QUE SE CONCEDAN; 
XV. CUANDO PROCEDA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA LLEVARSE A CABO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL CUARTO DIA NATURAL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES; 
XVI. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE; 
XVII. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN DIAS NATURALES, INDICANDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS; 
XVIII. MODELO DE CONTRATO AL QUE SE SUJETARAN LAS PARTES; 
XIX. TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO O MIXTOS EN SU PARTE CORRESPONDIENTE, A LAS CONDICIONES DE PAGO; 
XX. TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS O MIXTOS EN SU PARTE CORRESPONDIENTE, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE DEBERA APLICARSE, ASI COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, DEBE SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO; Y LA RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO MAS SIGNIFICATIVOS, DE LOS CUALES DEBERAN PRESENTAR ANALISIS Y RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN DICHOS ANALISIS. EN TODOS LOS CASOS SE DEBERA PREVER QUE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ESTE DEBIDAMENTE INTEGRADO Y SOPORTADO, PREFERENTEMENTE, EN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD SOLICITADAS, PROCURANDO QUE ESTOS CONCEPTOS SEAN CONGRUENTES CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO REQUERIDOS POR EL PROYECTO; 
XXI. LA INDICACION DE QUE EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 DE ESTA LEY; 
XXII. EN SU CASO, TERMINOS Y CONDICIONES A QUE DEBERA AJUSTARSE LA PARTICIPACION DE LOS LICITANTES CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA, O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA. EL QUE LOS LICITANTES OPTEN POR UTILIZAR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES NO LIMITA, EN NINGUN CASO, QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE UNA LICITACION, Y 
XXIII. LOS DEMAS REQUISITOS GENERALES QUE, POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS, LOS QUE NO DEBERAN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE ESTOS. 
PARA LA PARTICIPACION, CONTRATACION O ADJUDICACION EN OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NO SE LE PODRA EXIGIR AL PARTICULAR REQUISITOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR ESTA LEY. 
[Artículo 34] 
ARTICULO 34.- EL PLAZO PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LAS LICITACIONES INTERNACIONALES NO PODRA SER INFERIOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. 
EN LICITACIONES NACIONALES, EL PLAZO PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERA, CUANDO MENOS, DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. 
CUANDO NO PUEDAN OBSERVARSE LOS PLAZOS INDICADOS EN ESTE ARTICULO PORQUE EXISTAN RAZONES JUSTIFICADAS DEL AREA SOLICITANTE DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION PODRA REDUCIR LOS PLAZOS A NO MENOS DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.  
[Artículo 35] 
ARTICULO 35.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NUMERO DE LICITANTES, PODRAN MODIFICAR LOS PLAZOS U OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O EN LAS BASES DE LICITACION, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA PUBLICADA LA CONVOCATORIA Y HASTA, INCLUSIVE, EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIEMPRE QUE: 
I. TRATANDOSE DE LA CONVOCATORIA, LAS MODIFICACIONES SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS A TRAVES DE LOS MISMOS MEDIOS UTILIZADOS PARA SU PUBLICACION, Y 
II. EN EL CASO DE LAS BASES DE LA LICITACION, SE PUBLIQUE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, A FIN DE QUE LOS INTERESADOS CONCURRAN ANTE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA CONOCER, DE MANERA ESPECIFICA, LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS. 
NO SERA NECESARIO HACER LA PUBLICACION DEL AVISO A QUE SE REFIERE ESTA FRACCION, CUANDO LAS MODIFICACIONES DERIVEN DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, SIEMPRE QUE A MAS TARDAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN ESTE ARTICULO, SE ENTREGUE COPIA DEL ACTA RESPECTIVA A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LA CORRESPONDIENTE LICITACION. 
LAS MODIFICACIONES DE QUE TRATA ESTE ARTICULO EN NINGUN CASO PODRAN CONSISTIR EN LA SUSTITUCION O VARIACION SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICION DE OTROS DISTINTOS. 
CUALQUIER MODIFICACION A LAS BASES DE LA LICITACION, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, SERA CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACION. 
[Artículo 36] 
ARTICULO 36.- LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARA EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRAN, POR SEPARADO, LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA. LA DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS PODRA ENTREGARSE, A ELECCION DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA TECNICA. 
DOS O MAS PERSONAS PODRAN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPUESTA Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISION Y A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARA A EJECUTAR, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPUESTA DEBERA SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMUN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. 
PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS CONVOCANTES PODRAN EFECTUAR EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, ASI COMO REALIZAR REVISIONES PRELIMINARES A LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. LO ANTERIOR SERA OPTATIVO PARA LOS LICITANTES, POR LO QUE NO SE PODRA IMPEDIR EL ACCESO A QUIENES HAYAN CUBIERTO EL COSTO DE LAS BASES Y DECIDAN PRESENTAR SU DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES DURANTE EL PROPIO ACTO. 
[Artículo 37] 
ARTICULO 37.- EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EN DOS ETAPAS, CONFORME A LO SIGUIENTE: 
I. EN LA PRIMERA ETAPA, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS; SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA EXCLUSIVAMENTE Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS; 
II. POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PRESENTES, RUBRICARAN LAS PARTES DE LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS QUE PREVIAMENTE HAYA DETERMINADO LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACION, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARAN DOCUMENTALMENTE, ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES SOBRES CERRADOS QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, INCLUIDOS LOS DE AQUELLOS CUYAS PROPUESTAS TECNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA PROPIA CONVOCANTE, QUIEN DE ESTIMARLO NECESARIO PODRA SEÑALAR NUEVA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA APERTURA A LAS PROPUESTAS ECONOMICAS; 
III. SE LEVANTARA ACTA DE LA PRIMERA ETAPA, EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS, ASI COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRA A SU DISPOSICION O SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIENDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACION; 
IV. LA CONVOCANTE PROCEDERA A REALIZAR EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS, DEBIENDO DAR A CONOCER EL RESULTADO A LOS LICITANTES EN LA SEGUNDA ETAPA, PREVIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS; 
V. EN LA SEGUNDA ETAPA, UNA VEZ CONOCIDO EL RESULTADO TECNICO, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS NO HUBIEREN SIDO DESECHADAS, Y SE DARA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS. POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACION. 
SE SEÑALARAN LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION; ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIO DE LA PRIMERA ETAPA, Y PODRA DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, Y 
VI. SE LEVANTARA ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL RESULTADO TECNICO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS, SUS IMPORTES, ASI COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRA A SU DISPOSICION O SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIENDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACION. 
[Artículo 38] 
ARTICULO 38.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERA ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR. 
TRATANDOSE DE OBRAS PUBLICAS, DEBERA VERIFICAR, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS; QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS. EN NINGUN CASO PODRAN UTILIZARSE MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN SU EVALUACION. 
TRATANDOSE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, DEBERA VERIFICAR, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE; QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTE CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LOS RESPECTIVOS TERMINOS DE REFERENCIA; QUE LOS TABULADORES DE SUELDOS, LA INTEGRACION DE LAS PLANTILLAS Y EL TIEMPO DE EJECUCION CORRESPONDAN AL SERVICIO OFERTADO. ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA SERVICIO Y SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE SU CONVENIENCIA SE UTILIZARAN MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, SALVO EN LOS CASOS DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS DONDE INVARIABLEMENTE DEBERAN UTILIZARSE ESTOS MECANISMOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA. 
NO SERAN OBJETO DE EVALUACION LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS CONVOCANTES QUE TENGAN COMO PROPOSITO FACILITAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LA CONDUCCION DE LOS ACTOS DE LA LICITACION, . ASI COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO, CUYO INCUMPLIMIENTO POR SI MISMO, NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS. LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LOS LICITANTES RESPECTO A DICHAS CONDICIONES O REQUISITOS NO SERA MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPUESTAS. 
UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO. 
LA CONVOCANTE EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR UNA RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS. 
[Artículo 39] 
ARTICULO 39.- EN JUNTA PUBLICA SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION, A LA QUE LIBREMENTE PODRAN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LEVANTANDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUE FIRMARAN LOS ASISTENTES, A QUIENES SE ENTREGARA COPIA DE LA MISMA. 
LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIENDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACION. EN SUSTITUCION DE ESA JUNTA, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN OPTAR POR NOTIFICAR EL FALLO DE LA LICITACION POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS LICITANTES, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU EMISION. 
EN EL MISMO ACTO DE FALLO O ADJUNTA A LA COMUNICACION REFERIDA, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROPORCIONARAN POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTO GANADORA. 
CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERA LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA POR LOS LICITANTES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE ESTA LEY. 
[Artículo 40] 
ARTICULO 40.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A DECLARAR DESIERTA UNA LICITACION CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACION O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES, Y EXPEDIRAN UNA SEGUNDA CONVOCATORIA. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN CANCELAR UNA LICITACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA, PODRAN CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 
TITULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
CAPITULO TERCERO DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA 
[Artículo 41] 
ARTICULO 41.- EN LOS SUPUESTOS QUE PREVE EL SIGUIENTE ARTICULO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRAN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACION DIRECTA. 
LA SELECCION QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERA FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO. EL ACREDITAMIENTO DE LOS CRITERIOS MENCIONADOS Y LA JUSTIFICACION PARA EL EJERCICIO DE LA OPCION, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARA A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. 
EN ESTOS CASOS, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, ENVIARA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, UN INFORME RELATIVO A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, ACOMPAÑANDO COPIA DEL ESCRITO ALUDIDO EN ESTE ARTICULO Y DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL ANALISIS DE LA O LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. NO SERA NECESARIO RENDIR ESTE INFORME EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL ARTICULO 42, FRACCION IV, DE ESTA LEY.  
[Artículo 42] 
ARTICULO 42.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRAN CONTRATAR OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACION DIRECTA, CUANDO: 
I. EL CONTRATO SOLO PUEDA CELEBRARSE CON UNA DETERMINADA PERSONA POR TRATARSE DE OBRAS DE ARTE, TITULARIDAD DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS; 
II. PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O EL AMBIENTE DE ALGUNA ZONA O REGION DEL PAIS COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES PRODUCIDOS POR FENOMENOS NATURALES; 
III. EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PROVOCAR PERDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS; 
IV. SE REALICEN CON FINES EXCLUSIVAMENTE MILITARES O PARA LA ARMADA, SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION O COMPROMETAN INFORMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL PARA EL GOBIERNO FEDERAL; 
V. DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO SEA POSIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA EN EL TIEMPO REQUERIDO PARA ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE, EN ESTE SUPUESTO DEBERAN LIMITARSE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA AFRONTARLA; 
VI. SE HUBIERE RESCINDIDO EL CONTRATO RESPECTIVO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE HUBIERE RESULTADO GANADOR EN UNA LICITACION. EN ESTOS CASOS LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO; 
VII. SE REALICEN DOS LICITACIONES PUBLICAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS; 
VIII. SE TRATE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, RESTAURACION, REPARACION Y DEMOLICION DE INMUEBLES, EN LOS QUE NO SEA POSIBLE PRECISAR SU ALCANCE, ESTABLECER EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES O ELABORAR EL PROGRAMA DE EJECUCION; 
IX. SE TRATE DE TRABAJOS QUE REQUIERAN FUNDAMENTALMENTE DE MANO DE OBRA CAMPESINA O URBANA MARGINADA, Y QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATE DIRECTAMENTE CON LOS HABITANTES BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD O DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, YA SEA COMO PERSONAS FISICAS O MORALES; 
X. SE TRATE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS PRESTADOS POR UNA PERSONA FISICA, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN REALIZADOS POR ELLA MISMA, SIN REQUERIR DE LA UTILIZACION DE MAS DE UN ESPECIALISTA O TECNICO, O 
XI. SE ACEPTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TITULO DE DACION EN PAGO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION. 
[Artículo 43] 
ARTICULO 43.- SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO ANTERIOR, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRAN CONTRATAR OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, A TRAVES DE LOS DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACION DIRECTA, CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATO NO EXCEDA DE LOS MONTOS MAXIMOS QUE AL EFECTO SE ESTABLECERAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, SIEMPRE QUE LOS CONTRATOS NO SE FRACCIONEN PARA QUEDAR COMPRENDIDAS EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. 
CUANDO DIVERSAS AREAS DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES SEAN LAS QUE POR SI MISMAS REALICEN LAS CONTRATACIONES, LOS MONTOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO SE CALCULARAN DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO QUE A CADA UNA DE ELLAS LE CORRESPONDA EJERCER. 
LA SUMA DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE ESTE ARTICULO NO PODRA EXCEDER DEL VEINTE POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL. 
EN CASOS EXCEPCIONALES, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O EL ORGANO DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD, DE MANERA INDELEGABLE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA FIJAR UN PORCENTAJE MAYOR AL INDICADO EN ESTE ARTICULO, DEBIENDOLO HACER DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 
EN EL SUPUESTO DE QUE DOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HAYAN SIDO DECLARADOS DESIERTOS, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ADJUDICAR DIRECTAMENTE EL CONTRATO. 
[Artículo 44] 
ARTICULO 44.- EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 
I. EL ACTO PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EN DOS ETAPAS, PARA LO CUAL LA APERTURA DE LOS SOBRES PODRA HACERSE SIN LA PRESENCIA DE LOS CORRESPONDIENTES LICITANTES, PERO INVARIABLEMENTE SE INVITARA A UN REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD; 
II. PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE, SE DEBERA CONTAR CON UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE TECNICAMENTE; 
III. EN LAS BASES SE INDICARAN, SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, AQUELLOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN AL ARTICULO 33 DE ESTA LEY; 
IV. LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES SE FIJARAN PARA CADA CONTRATO, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 
V. EL CARACTER NACIONAL O INTERNACIONAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 30 DE ESTA LEY, Y 
VI. A LAS DEMAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RESULTEN APLICABLES. 
TITULO CUARTO DE LOS CONTRATOS 
CAPITULO PRIMERO DE LA CONTRATACION 
[Artículo 45] 
ARTICULO 45.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PODRAN SER DE TRES TIPOS: 
I. SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO; 
II. A PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERA POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO. 
LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS CONTRATISTAS PARA LA CELEBRACION DE ESTOS CONTRATOS, TANTO EN SUS ASPECTOS TECNICOS COMO ECONOMICOS, DEBERAN ESTAR DESGLOSADAS POR LO MENOS EN CINCO ACTIVIDADES PRINCIPALES, Y 
III. MIXTOS, CUANDO CONTENGAN UNA PARTE DE LOS TRABAJOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y OTRA, A PRECIO ALZADO. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN INCORPORAR EN LAS BASES DE LICITACION LAS MODALIDADES DE CONTRATACION QUE TIENDAN A GARANTIZAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE CON ELLO NO DESVIRTUEN EL TIPO DE CONTRATO QUE SE HAYA LICITADO. 
LOS TRABAJOS CUYA EJECUCION COMPRENDAN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEBERAN FORMULARSE EN UN SOLO CONTRATO, POR LA VIGENCIA QUE RESULTE NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO UNICAMENTE SUJETOS A LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CADA EJERCICIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL. 
[Artículo 46] 
ARTICULO 46.- LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CONTENDRAN, . COMO MINIMO, LO SIGUIENTE: 
I. LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS; 
II. LA INDICACION DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DEL CONTRATO; 
III. EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EN EL CASO DE CONTRATOS MIXTOS, LA PARTE Y SU MONTO QUE SERA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y LA QUE CORRESPONDA A PRECIO ALZADO; 
IV. EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN DIAS NATURALES, INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS MISMOS, ASI COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACION DEL FINIQUITO REFERIDO EN EL ARTICULO 64 DE ESTA LEY, LOS CUALES DEBEN SER ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 
V. PORCENTAJES, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN; 
VI. FORMA Y TERMINOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; 
VII. PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS; 
VIII. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, LAS QUE EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN FIJAR LOS TERMINOS, FORMA Y PORCENTAJES PARA APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES; 
IX. TERMINOS EN QUE EL CONTRATISTA, EN SU CASO, REINTEGRARA LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO POR LA CONTRATACION O DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE UTILIZARA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE ESTE ORDENAMIENTO; 
X. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE DEBERA SER EL DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL CUAL DEBERA REGIR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; 
XI. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO MEDIANTE LOS CUALES LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE ESTA LEY; 
XII. LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATANDOSE DE SERVICIOS, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, Y 
XIII. LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS PARTES, ENTRE SI, RESOLVERAN LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE, DE NINGUNA MANERA, IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION. 
PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
[Artículo 47] 
ARTICULO 47.- LA ADJUDICACION DEL CONTRATO OBLIGARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LA PERSONA EN QUIEN HUBIERE RECAIDO, A FORMALIZAR EL DOCUMENTO RELATIVO DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACION DEL FALLO. NO PODRA FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 48 DE ESTA LEY. 
SI EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 38 DE ESTA LEY, Y ASI SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. 
SI LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO, EL LICITANTE GANADOR, SIN RECURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS. 
EN ESTE SUPUESTO, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, A SOLICITUD ESCRITA DEL LICITANTE, CUBRIRA LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPUESTA, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA LICITACION DE QUE SE TRATE. 
EL CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, NO PODRA HACERLO EJECUTAR POR OTRO; PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LAS OBRAS. ESTA AUTORIZACION PREVIA NO SE REQUERIRA CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SEÑALE ESPECIFICAMENTE EN LAS BASES DE LA LICITACION, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION. EN TODO CASO, EL CONTRATISTA SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. 
[Artículo 48] 
ARTICULO 48.- LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE ESTA LEY DEBERAN GARANTIZAR: 
I. LOS ANTICIPOS QUE, EN SU CASO, RECIBAN. ESTAS GARANTIAS DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS, Y 
II. EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS O LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDADES FIJARAN LAS BASES, LA FORMA Y EL PORCENTAJE A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE. EN LOS CASOS SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 42, FRACCIONES IX Y X, Y 43 DE ESTA LEY, EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA FIRMAR EL CONTRATO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA EXCEPTUAR A LOS CONTRATISTAS DE PRESENTAR LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO.  
[Artículo 49] 
ARTICULO 49.- LAS GARANTIAS QUE DEBAN OTORGARSE CONFORME A ESTA LEY SE CONSTITUIRAN EN FAVOR DE: 
I. LA TESORERIA DE LA FEDERACION, POR ACTOS O CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON LAS DEPENDENCIAS; 
II. LAS ENTIDADES, CUANDO LOS ACTOS O CONTRATOS SE CELEBREN CON ELLAS, Y 
III. LAS TESORERIAS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN LOS CASOS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 1 DE ESTA LEY. 
[Artículo 50] 
ARTICULO 50.- EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SE DEBERA PACTAR EN LOS CONTRATOS Y SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 
I. EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 48 DE ESTA LEY, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE; 
II. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN OTORGAR HASTA UN TREINTA POR CIENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. 
TRATANDOSE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SERA DETERMINADO POR LA CONVOCANTE ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DEL SERVICIO; EN EL SUPUESTO DE QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DECIDA OTORGARLO, DEBERA AJUSTARSE A LO PREVISTO EN ESTE ARTICULO; 
III. EL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERA SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR LOS LICITANTES PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPUESTA; 
IV. CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN, EL PORCENTAJE DE ANTICIPO PODRA SER MAYOR, EN CUYO CASO SERA NECESARIA LA AUTORIZACION ESCRITA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD O DE LA PERSONA EN QUIEN ESTE HAYA DELEGADO TAL FACULTAD; 
V. CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. 
EN EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS SERA MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO PACTADO EN EL CONTRATO, Y 
VI. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE ESTA LEY, SALVO PARA AQUELLOS QUE ALUDE EL ULTIMO PARRAFO DEL MISMO; NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. 
PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. 
EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE ESTA LEY. 
[Artículo 51] 
ARTICULO 51.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE ABSTENDRAN DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATO ALGUNO EN LAS MATERIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, CON LAS PERSONAS SIGUIENTES: 
I. AQUELLAS EN QUE EL SERVIDOR PUBLICO QUE INTERVENGA EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION TENGA INTERES PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS, INCLUYENDO AQUELLAS DE LAS QUE PUEDA RESULTAR ALGUN BENEFICIO PARA EL, SU CONYUGE O SUS PARIENTES CONSANGUINEOS HASTA EL CUARTO GRADO, POR AFINIDAD O CIVILES, O PARA TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS, O PARA SOCIOS O SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR PUBLICO O LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE; 
II. LAS QUE DESEMPEÑEN UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, O BIEN, LAS SOCIEDADES DE LAS QUE DICHAS PERSONAS FORMEN PARTE, SIN LA AUTORIZACION PREVIA Y ESPECIFICA DE LA CONTRALORIA CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; ASI COMO LAS INHABILITADAS PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO; 
III. AQUELLOS CONTRATISTAS QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO DENTRO DE UN LAPSO DE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERA ANTE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE DURANTE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION; 
IV. LAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA CONTRALORIA, EN LOS TERMINOS DEL TITULO SEPTIMO DE ESTE ORDENAMIENTO Y TITULO SEXTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; 
V. AQUELLAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS EN SUSPENSION DE PAGOS, ESTADO DE QUIEBRA O SUJETAS A CONCURSO DE ACREEDORES; 
VI. LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN UN MISMO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS ENTRE SI POR ALGUN SOCIO O ASOCIADO COMUN; 
VII. LAS QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y PREVIAMENTE, HAYAN REALIZADO O SE ENCUENTREN REALIZANDO POR SI O A TRAVES DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, EN VIRTUD DE OTRO CONTRATO, EL PROYECTO; TRABAJOS DE DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA E INSTALACIONES; LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD, GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y DE RESISTENCIA DE MATERIALES; RADIOGRAFIAS INDUSTRIALES; PREPARACION DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION; PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS; SELECCION O APROBACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y PROCESOS, O LA ELABORACION DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO VINCULADO CON EL PROCEDIMIENTO, EN QUE SE ENCUENTRAN INTERESADAS EN PARTICIPAR; 
VIII. AQUELLAS QUE POR SI O A TRAVES DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, PRETENDAN SER CONTRATADAS PARA LA ELABORACION DE DICTAMENES, PERITAJES Y AVALUOS, CUANDO ESTOS HAYAN DE SER UTILIZADOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE DICHAS PERSONAS O EMPRESAS SEAN PARTES, Y 
IX. LAS DEMAS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN IMPEDIDAS PARA ELLO POR DISPOSICION DE LEY. 
TITULO CUARTO DE LOS CONTRATOS 
CAPITULO SEGUNDO DE LA EJECUCION 
[Artículo 52] 
ARTICULO 52.- LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE OPORTUNAMENTE PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. 
[Artículo 53] 
ARTICULO 53.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTABLECERAN LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LAS MISMAS, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 
[Artículo 54] 
ARTICULO 54.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. 
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, LA FORMA DE ESTIMAR LOS TRABAJOS Y LOS PLAZOS PARA SU PAGO DEBERAN ESTABLECERSE EN LAS BASES DE LICITACION Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
[Artículo 55] 
ARTICULO 55.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATISTA. 
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.  
[Artículo 56] 
ARTICULO 56.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 57 DE ESTA LEY. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. 
NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 
[Artículo 57] 
ARTICULO 57.- EL AJUSTE DE COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; 
II. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, Y 
III. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. 
[Artículo 58] 
ARTICULO 58.- LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 
I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO. 
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO. 
PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES; 
II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; 
III. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y 
IV. A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA. 
[Artículo 59] 
ARTICULO 59.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS. 
SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY O DE LOS TRATADOS. 
LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA NO PODRAN SER MODIFICADOS EN MONTO O EN PLAZO, NI ESTARAN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS. 
SIN EMBARGO, CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZON NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE CONSIDERACION EN LA PROPUESTA QUE SIRVIO DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; COMO SON, ENTRE OTRAS: VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA O CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO; LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN RECONOCER INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES. 
LO DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE REGIRA POR LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDA LA CONTRALORIA; LOS CUALES DEBERAN CONSIDERAR, ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS MECANISMOS CON QUE CUENTAN LAS PARTES PARA HACER FRENTE A ESTAS SITUACIONES. 
UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA CELEBRACION OPORTUNA DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. 
DE LAS AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS INFORMARA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SE TRATE. AL EFECTO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, DEBERA PRESENTARSE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 
CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. 
NO SERA APLICABLE EL PORCENTAJE QUE SE ESTABLECE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTE ARTICULO, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS CUYOS TRABAJOS SE REFIERAN AL MANTENIMIENTO O RESTAURACION DE LOS INMUEBLES A QUE HACE MENCION EL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN LOS QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LAS CANTIDADES DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
[Artículo 60] 
ARTICULO 60.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DESIGNARAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. 
[Artículo 61] 
ARTICULO 61.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; 
II. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, Y 
III. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCION I DE ESTE ARTICULO. 
[Artículo 62] 
ARTICULO 62.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE LO SIGUIENTE: 
I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; 
II. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; 
III. CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PAGARA AL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y 
IV. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA. 
UNA VEZ COMUNICADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTAS PROCEDERAN A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. EN EL CASO DE ENTIDADES, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. 
EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.  
[Artículo 63] 
ARTICULO 63.- DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO ANTERIOR, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES COMUNICARAN LA SUSPENSION, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO AL CONTRATISTA; POSTERIORMENTE, LO HARAN DEL CONOCIMIENTO DE SU ORGANO INTERNO DE CONTROL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRA LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 
[Artículo 64] 
ARTICULO 64.- EL CONTRATISTA COMUNICARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. 
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
[Artículo 65] 
ARTICULO 65.- A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS PUBLICAS, LAS DEPENDENCIAS Y, EN SU CASO, LAS ENTIDADES, DEBERAN REGISTRAR EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS TITULOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES DE AQUELLOS INMUEBLES QUE SE HAYAN ADQUIRIDO CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, Y EN SU CASO DEBERAN REMITIR A LA CONTRALORIA LOS TITULOS DE PROPIEDAD PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL Y SU INCLUSION EN EL CATALOGO E INVENTARIO DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LA NACION. 
[Artículo 66] 
ARTICULO 66.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE . RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE. 
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS, A SU ELECCION, DEBERAN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. 
LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERAN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. 
LOS CONTRATISTAS, EN SU CASO, PODRAN RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDARA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, SEGUN SEA EL CASO. 
QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE ARTICULO. 
EN LOS CASOS SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 42, FRACCIONES IX Y X, Y 43 DE ESTA LEY, EL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA EXCEPTUAR A LOS CONTRATISTAS DE PRESENTAR LA GARANTIA A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. 
[Artículo 67] 
ARTICULO 67.- EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. 
[Artículo 68] 
ARTICULO 68.- UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES VIGILARAN QUE LA UNIDAD QUE DEBE OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE DE LA RESPONSABLE DE SU REALIZACION, EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 
[Artículo 69] 
ARTICULO 69.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BAJO CUYA RESPONSABILIDAD QUEDE UNA OBRA PUBLICA CONCLUIDA, ESTARAN OBLIGADAS, POR CONDUCTO DEL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACION, A MANTENERLA EN NIVELES APROPIADOS DE FUNCIONAMIENTO. LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL VIGILARAN QUE SU USO, OPERACION Y MANTENIMIENTO SE REALICE CONFORME A LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LAS QUE FUERON ORIGINALMENTE DISEÑADAS.  
TITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DIRECTA 
CAPITULO UNICO 
[Artículo 70] 
ARTICULO 70.- CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 24 DE ESTA LEY, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN REALIZAR TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, SIEMPRE QUE POSEAN LA CAPACIDAD TECNICA Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO, CONSISTENTES EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y PERSONAL TECNICO, SEGUN EL CASO, QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS Y PODRAN: 
I. UTILIZAR LA MANO DE OBRA LOCAL QUE SE REQUIERA, LO QUE INVARIABLEMENTE DEBERA LLEVARSE A CABO POR OBRA DETERMINADA; II. ALQUILAR EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIO; 
III. UTILIZAR PREFERENTEMENTE LOS MATERIALES DE LA REGION, Y 
IV. UTILIZAR LOS SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS COMPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERAN. 
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRAN PARTICIPAR TERCEROS COMO CONTRATISTAS, SEAN CUALES FUEREN LAS CONDICIONES PARTICULARES, NATURALEZA JURIDICA O MODALIDADES QUE ESTOS ADOPTEN. 
CUANDO SE REQUIERAN EQUIPOS, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS PREFABRICADOS TERMINADOS, MATERIALES U OTROS BIENES QUE DEBAN SER INSTALADOS, MONTADOS, COLOCADOS O APLICADOS, SU ADQUISICION SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A TAL MATERIA. 
[Artículo 71] 
ARTICULO 71.- PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EMITIRA EL ACUERDO RESPECTIVO, DEL CUAL FORMARAN PARTE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. 
LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, VERIFICARAN QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCION, DE UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y, EN SU CASO, DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 
[Artículo 72] 
ARTICULO 72.- LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTARA A CARGO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA; UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DEBERA ENTREGARSE AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACION O MANTENIMIENTO. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. 
[Artículo 73] 
ARTICULO 73.- LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA PREVER Y PROVEER TODOS LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, MATERIALES Y ECONOMICOS NECESARIOS PARA QUE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS; LOS PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVARLOS A CABO. 
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA SERAN APLICABLES, EN LO PROCEDENTE, LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY. 
TITULO SEXTO DE LA INFORMACION Y VERIFICACION 
CAPITULO UNICO 
[Artículo 74] 
ARTICULO 74.- LA FORMA Y TERMINOS EN QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN REMITIR A LA CONTRALORIA, A LA SECRETARIA Y A LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL LA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTOS Y CONTRATOS MATERIA DE ESTA LEY, SERAN ESTABLECIDOS POR DICHAS SECRETARIAS, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. 
LA INFORMACION A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE ESTA LEY DEBERA REMITIRSE POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LA CONTRALORIA, A TRAVES DE MEDIOS MAGNETICOS O REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA LA PROPIA CONTRALORIA. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONSERVARAN EN FORMA ORDENADA Y SISTEMATICA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS MATERIA DE ESTE ORDENAMIENTO, CUANDO MENOS POR UN LAPSO DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION; EXCEPTO LA DOCUMENTACION CONTABLE, EN CUYO CASO SE ESTARA A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
[Artículo 75] 
ARTICULO 75.- LA CONTRALORIA, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, PODRA VERIFICAR, EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. SI LA CONTRALORIA DETERMINA LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REEMBOLSARA A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYAN INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION CORRESPONDIENTE. 
LA CONTRALORIA PODRA REALIZAR LAS VISITAS E INSPECCIONES QUE ESTIME PERTINENTES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE REALICEN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, E IGUALMENTE PODRA SOLICITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y A LOS CONTRATISTAS QUE PARTICIPEN EN ELLOS TODOS LOS DATOS E INFORMES RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE QUE SE TRATE. 
[Artículo 76] 
ARTICULO 76.- LA CONTRALORIA PODRA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE LOS LABORATORIOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACION O CON LAS PERSONAS QUE DETERMINE, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION Y QUE PODRAN SER AQUELLOS CON LOS QUE CUENTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. 
EL RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES SE HARA CONSTAR EN UN DICTAMEN QUE SERA FIRMADO POR QUIEN HAYA HECHO LA COMPROBACION, ASI COMO POR EL CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPECTIVA, SI HUBIEREN INTERVENIDO. LA FALTA DE FIRMA DEL CONTRATISTA NO INVALIDARA DICHO DICTAMEN.  
TITULO SEPTIMO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPITULO UNICO 
[Artículo 77] 
ARTICULO 77.- LOS LICITANTES O CONTRATISTAS QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SERAN SANCIONADOS POR LA CONTRALORIA CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE CINCUENTA HASTA MIL VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL ELEVADO AL MES, EN LA FECHA DE LA INFRACCION. 
[Artículo 78] 
ARTICULO 78.- LA CONTRALORIA, ADEMAS DE LA SANCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, INHABILITARA TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION O CELEBRAR CONTRATOS REGULADOS POR ESTA LEY AL LICITANTE O CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 
I. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE; 
II. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 51 DE ESTE ORDENAMIENTO, RESPECTO DE DOS O MAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES; 
III. LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, Y 
IV. LOS LICITANTES O CONTRATISTAS QUE PROPORCIONEN INFORMACION FALSA, O QUE ACTUEN CON DOLO O MALA FE EN ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACION O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION O DE UNA INCONFORMIDAD. 
LA INHABILITACION QUE IMPONGA NO SERA MENOR DE TRES MESES NI MAYOR DE CINCO AÑOS, PLAZO QUE COMENZARA A CONTARSE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA CONTRALORIA LA HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MEDIANTE LA PUBLICACION DE LA CIRCULAR RESPECTIVA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCION A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, REMITIRAN A LA CONTRALORIA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCION. 
[Artículo 79] 
ARTICULO 79.- LA CONTRALORIA IMPONDRA LAS SANCIONES CONSIDERANDO: 
I. LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN PRODUCIDO O PUEDAN PRODUCIRSE; 
II. EL CARACTER INTENCIONAL O NO DE LA ACCION U OMISION CONSTITUTIVA DE LA INFRACCION; 
III. LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION, Y 
IV. LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR. 
LA CONTRALORIA IMPONDRA LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE QUE TRATA ESTE TITULO, CON BASE EN LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
[Artículo 80] 
ARTICULO 80.- LA CONTRALORIA APLICARA LAS SANCIONES QUE PROCEDAN, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ORDENAMIENTO. 
[Artículo 81] 
ARTICULO 81.- LAS RESPONSABILIDADES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY SERAN INDEPENDIENTES DE LAS DE ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDAN DERIVAR DE LA COMISION DE LOS MISMOS HECHOS. 
[Artículo 82] 
ARTICULO 82.- CUANDO SE HAYA INCURRIDO EN INFRACCION POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O DE CASO FORTUITO, O CUANDO SE OBSERVE EN FORMA ESPONTANEA EL PRECEPTO QUE SE HUBIESE DEJADO DE CUMPLIR, NO SE IMPONDRAN SANCIONES. NO SE CONSIDERARA QUE EL CUMPLIMIENTO ES ESPONTANEO CUANDO LA OMISION SEA DESCUBIERTA POR LAS AUTORIDADES O MEDIE REQUERIMIENTO, VISITA, EXCITATIVA O CUALQUIER OTRA GESTION EFECTUADA POR LAS MISMAS. 
TITULO OCTAVO DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 
CAPITULO PRIMERO DE LAS INCONFORMIDADES 
[Artículo 83] 
ARTICULO 83.- LAS PERSONAS INTERESADAS PODRAN INCONFORMARSE ANTE LA CONTRALORIA POR CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE ESTA LEY. 
LA INCONFORMIDAD SERA PRESENTADA, A ELECCION DEL PROMOVENTE, POR ESCRITO O A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA CONTRALORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE OCURRA EL ACTO O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DE ESTE. 
TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE ARTICULO, PRECLUYE PARA LOS INTERESADOS EL DERECHO A INCONFORMARSE, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONTRALORIA PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIEMPO EN TERMINOS DE LEY. 
LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PERSONAS INTERESADAS PREVIAMENTE MANIFIESTEN A LA CONTRALORIA LAS IRREGULARIDADES QUE A SU JUICIO SE HAYAN COMETIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, A FIN DE QUE LAS MISMAS SE CORRIJAN. 
LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO.  
[Artículo 84] 
ARTICULO 84.- EN LA INCONFORMIDAD QUE SE PRESENTE EN LOS TERMINOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO, EL PROMOVENTE DEBERA MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS QUE ADUCE SON IRREGULARES Y ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION. LA FALTA DE PROTESTA INDICADA SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA INCONFORMIDAD. 
LA MANIFESTACION DE HECHOS FALSOS SE SANCIONARA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y A LAS DEMAS QUE RESULTEN APLICABLES. 
CUANDO UNA INCONFORMIDAD SE RESUELVA COMO NO FAVORABLE AL PROMOVENTE POR RESULTAR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE Y SE ADVIERTA QUE SE HIZO CON EL UNICO PROPOSITO DE RETRASAR Y ENTORPECER LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION; SE LE IMPONDRA MULTA CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 77 DE ESTA LEY. 
[Artículo 85] 
ARTICULO 85.- EN LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, DEBERAN UTILIZARSE MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA EN SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA. 
DICHAS INCONFORMIDADES, LA DOCUMENTACION QUE LAS ACOMPAÑE Y LA MANERA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE, SE SUJETARAN A LAS DISPOSICIONES TECNICAS QUE PARA EFECTOS DE LA TRANSMISION EXPIDA LA CONTRALORIA, EN CUYO CASO PRODUCIRAN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS MEDIOS DE IDENTIFICACION Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. 
[Artículo 86] 
ARTICULO 86.- LA CONTRALORIA PODRA DE OFICIO O EN ATENCION A LAS INCONFORMIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 83 DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, REALIZAR LAS INVESTIGACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES, A FIN DE VERIFICAR QUE LOS ACTOS DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL ACTO IRREGULAR. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES. 
LA CONTRALORIA PODRA REQUERIR INFORMACION A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CORRESPONDIENTES, QUIENES DEBERAN REMITIRLA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL REQUERIMIENTO RESPECTIVO. 
UNA VEZ ADMITIDA LA INCONFORMIDAD O INICIADAS LAS INVESTIGACIONES, LA CONTRALORIA DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE TERCEROS QUE PUDIERAN RESULTAR PERJUDICADOS, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO A QUE ALUDE EL PARRAFO ANTERIOR MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL TERCERO PERJUDICADO HAGA MANIFESTACION ALGUNA, SE TENDRA POR PRECLUIDO SU DERECHO. 
DURANTE LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, LA CONTRALORIA PODRA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, CUANDO: 
I. SE ADVIERTA QUE EXISTAN O PUDIEREN EXISTIR ACTOS CONTRARIOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY O A LAS QUE DE ELLA DERIVEN, O BIEN, QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUDIERA PRODUCIRSE DAÑOS O PERJUICIOS A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, Y 
II. CON LA SUSPENSION NO SE CAUSE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL Y NO SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. 
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA INFORMAR DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION, APORTANDO LA JUSTIFICACION DEL CASO, SI CON LA MISMA NO SE CAUSA PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O BIEN, SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO, PARA QUE LA CONTRALORIA RESUELVA LO QUE PROCEDA. 
CUANDO SEA EL INCONFORME QUIEN SOLICITE LA SUSPENSION, ESTE DEBERA GARANTIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR, MEDIANTE FIANZA POR EL MONTO QUE FIJE LA CONTRALORIA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO EXPIDA; SIN EMBARGO, EL TERCERO PERJUDICADO PODRA DAR CONTRAFIANZA EQUIVALENTE A LA QUE . CORRESPONDA A LA FIANZA, EN CUYO CASO QUEDARA SIN EFECTO LA SUSPENSION. 
[Artículo 87] 
ARTICULO 87.- LA RESOLUCION QUE EMITA LA CONTRALORIA TENDRA POR CONSECUENCIA: 
I. LA NULIDAD DEL ACTO O ACTOS IRREGULARES ESTABLECIENDO, CUANDO PROCEDA, LAS DIRECTRICES NECESARIAS PARA QUE EL MISMO SE REPONGA CONFORME A ESTA LEY; 
II. LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, O 
III. LA DECLARACION RELATIVA A LO INFUNDADO DE LA INCONFORMIDAD. 
[Artículo 88] 
ARTICULO 88.- EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE INCONFORMIDAD QUE DICTE LA CONTRALORIA, SE PODRA INTERPONER EL RECURSO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O BIEN, IMPUGNARLA ANTE LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES COMPETENTES. 
TITULO OCTAVO DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 
CAPITULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 
[Artículo 89] 
ARTICULO 89.- LOS CONTRATISTAS PODRAN PRESENTAR QUEJAS ANTE LA CONTRALORIA, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN CELEBRADOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 
UNA VEZ RECIBIDA LA QUEJA RESPECTIVA, LA CONTRALORIA SEÑALARA DIA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION Y CITARA A LAS PARTES. DICHA AUDIENCIA SE DEBERA CELEBRAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA QUEJA. 
LA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION SERA OBLIGATORIA PARA AMBAS PARTES, POR LO QUE LA INASISTENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA TRAERA COMO CONSECUENCIA EL TENERLO POR DESISTIDO DE SU QUEJA. 
[Artículo 90] 
ARTICULO 90.- EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, LA CONTRALORIA TOMANDO EN CUENTA LOS HECHOS MANIFESTADOS EN LA QUEJA Y LOS ARGUMENTOS QUE HICIERE VALER LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPECTIVA, DETERMINARA LOS ELEMENTOS COMUNES Y LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA Y EXHORTARA A LAS PARTES PARA CONCILIAR SUS INTERESES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SIN PREJUZGAR SOBRE EL CONFLICTO PLANTEADO. 
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, LA AUDIENCIA SE PODRA REALIZAR EN VARIAS SESIONES. PARA ELLO, LA CONTRALORIA SEÑALARA LOS DIAS Y HORAS PARA QUE TENGAN VERIFICATIVO. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DEBERA AGOTARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE SESENTA DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA CELEBRADO LA PRIMERA SESION. 
DE TODA DILIGENCIA DEBERA LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTEN LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES.  
[Artículo 91] 
ARTICULO 91.- EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A UNA CONCILIACION, EL CONVENIO RESPECTIVO OBLIGARA A LAS MISMAS, Y SU CUMPLIMIENTO PODRA SER DEMANDADO POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. EN CASO CONTRARIO, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS, PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES. 
TRANSITORIOS 
[Artículo Primero Transitorio] 
PRIMERO.- LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR SESENTA DIAS DESPUES AL DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 
[Artículo Segundo Transitorio] 
SEGUNDO.- SE DEROGA LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, EN LO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA. 
[Artículo Tercero Transitorio] 
TERCERO.- LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, VIGENTES AL MOMENTO DE LA PUBLICACION DE ESTE ORDENAMIENTO, SE SEGUIRAN APLICANDO EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDEN LAS QUE DEBAN SUSTITUIRLAS. 
[Artículo Cuarto Transitorio] 
CUARTO.- EL EJECUTIVO FEDERAL EXPEDIRA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
[Artículo Quinto Transitorio] 
QUINTO.- LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; DE APLICACION DE SANCIONES Y DE INCONFORMIDADES, ASI COMO LOS DEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O PENDIENTE DE RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE INICIARON. LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY, CONTINUARAN RIGIENDOSE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. 
LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 51, FRACCION III, Y 78, FRACCION II DE ESTA LEY. 
MEXICO, D.F., A 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.- SEN. DIONISIO PEREZ JACOME, VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES.- DIP. FRANCISCO JOSE PAOLI BOLIO, PRESIDENTE.- SEN. RAUL JUAREZ VALENCIA, SECRETARIO.- DIP. FRANCISCO J. LOYO RAMOS, SECRETARIO.- RUBRICAS". 
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA, EXPIDO EL PRESENTE DECRETO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBERNACION, DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO.- RUBRICA.